고군산군도 연결도로(3공구) 건설공사

상운지구

L=7.00km

(전북 군산시 옥도면 무녀도2길 42)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보동영상 시청, 현장소개, 장자교 시공공법(FCM) 브리핑 및 질의응답	30분
3	안전장비 착용 후 장자교 시공현장 이동	20분
4	장자교 시공공법(FCM) 현장설명	20분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	20분
6	설문조사 작성 및 감평	20분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
하부공													- A1 : 기 시공완료 - A2 : 기 시공완료
상부공													- P1 : 기 시공완료 - P2 : 기 시공완료
케이블공													- P1 : 기 시공완료 - P2 : 기 시공완료
부대공 (약 30일)													- 교면포장(LMC) 5,292㎡ - 방호시설(차량) 589m - 신축이음장치(핑거) 39m

사 진 대 지

내 용	교면포장 시공(LMC)
위 치	장자교	예정일정	2017년 10월까지
내 용	부대공(방호시설 및 신축이음장치) 시공
위 치	장자교	예정일정	2017년 10월까지

군장대교 건설공사

상운지구

L=7.00km

(전북 군산시 성산면 철새로 31 208호)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보 동영상 시청, 공사진행 현황	30분
3	교량 시공공법 브리핑 및 견학	40분
4	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	20분
5	설문조사 작성 및 감평	20분
6	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
접속A교													- 교각 1개소, 교대 1개소, - 강교 설치
L형옹벽													- 옹벽 281m
해망R-A, R-B													- 아스콘포장 방호벽 타설

사 진 대 지

내 용	군산측 접속교량
위 치	접속A교, L형옹벽	예정일정
내 용	해망IC교 R-A, R-B교
위 치	교면포장, 교량부대공	예정일정

신지-고금 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 완도군 신지면 송곡리 1192-1)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보동영상 시청 사업현황 브리핑 및 질의응답	30분
3	안전장비 착용 후 주경간교 시공현장 이동(접속2교 상부)	20분
4	주경간교 시공공법 브리핑 및 견학	10분
5	주탑 시공 견학 (현장여건에 따라 인원 제한)	15분
6	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	15분
7	설문조사 작성 및 감평	20분
8	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
토공운반													- 고금 → 송곡 토공운반
배수공													- 접속도로 배수시설공사
포장공													- 접속도로 (시·종점) 포장공
전기 및 조경공사													- 교량점검시설 및 기타 부대시설 - 초기우수처리시설 및 배수시설
교량 부대공사													- 교량 차량 방호책등 - LMC포장 및 기타 부대공사

사 진 대 지

내 용	접속도로 배수구조물 시공
위 치		예정일정	2017년 11월까지
내 용	토공운반 (시점 → 종점)
위 치	3+677	예정일정	2017년 4월까지

사 진 대 지

내 용	흙깎기
위 치	2+400	예정일정	2017년 3월~4월
내 용	배수구조물 시공
위 치	3+667	예정일정	2017년 11월

압해-암태(1공구) 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 신안군 압해면 송공리 795)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 180 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보 동영상 시청, 현장소개, 질의응답	30분
3	안전장비 착용 후 접속1교 이동 (송공항 페리호 이용, 왕복 8,000원)	50분
4	시공공법 브리핑 및 견학	30분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	50분
6	설문조사 작성 및 감평	10분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
주탑(ACS)													- 주탑 PY1 24~45LOT, 가로보 - 주탑 PY2 29~31LOT, 가로보
상부슬래브(FCM)													- PY1 7SEG~13SEG - PY2 1SEG~13SEG
상부슬래브(MSS)													- 접속2교 P30~P42(12SPAN)
강교													- 케이블 및 강교 가설

사 진 대 지

내 용	주탑 PY1 ACS 및 가로보
위 치	주경간교	예정일정	2017년 12월까지
내 용	주탑 PY2 ACS 및 가로보
위 치	주경간교	예정일정	2017년 08월까지

사 진 대 지

내 용	PY1 상부슬래브(FCM)
위 치	주경간교	예정일정	2017년 5월
내 용	P30~P42 상부슬래브(MSS)
위 치	접속2교	예정일정	2017년 12월

압해-암태(2공구) 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 신안군 압해읍 송공리 849)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	현장소개, 홍보동영상 시청 및 질의응답	30분
3	안전장비 착용 후 주항로교 시공현장 이동	15분
4	주항로교 시공공법 브리핑 및 견학	35분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	20분
6	설문조사 작성 및 감평	10분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
가설구조물, 벤트류 및 새들 설치													- 탑정벤트, 부탑벤트, 스플레이벤트 및 각종 작업발판 설치 - 주탑새들, 부탑새들, 스플레이새들 등의 새들류 설치 -총 90일-
Hauling System 구축													- Pilot Rope 도해작업 - 임시 Hailing System 구축 -총 10일-
Catwalk System 구축 Tramway Rope 가설													- Catwalk Rope, Floor 가설 - Catwalk Sag 조정 -총 70일- - Tramway Support Rope 가설 - Gallows Frame 가설 -총 25일-
PPWS 가설													- Strand 가설 - Gauge wire 가설 - Hauling Sustem 해체 -총 40일-
Main Cable Compaction													- Pre Compaction - Main Compaction -총 70일-
Cable Band 및 Hanger Rope 설치													- Cable Band 설치 - Band bolt 긴장 -총 30일- - Hanger Rope 설치 -총 30일-
Main Girder 설치													- Main Girer Erection - 거더 용접 -총 150일-

사 진 대 지

내 용	가설구조물, 벤트류 설치
위 치	주탑 및 부탑, 앵커리지	예정일정	2017년 2월 까지
내 용	Hauling System 구축
위 치	주항로교	예정일정	2017년 3월

사 진 대 지

내 용	Catwalk System 구축
위 치	주항로교	예정일정	2017년 3월 ~ 5월
내 용	Tramway Support Rope 가설
위 치	주항로교	예정일정	2017년 6월

사 진 대 지

내 용	PPWS 가설
위 치	주항로교	예정일정	2017년 6월 ~ 7월
내 용	Main Cable Compaction
위 치	주항로교	예정일정	2017년 7월 ~ 9월

내 용	Cable Band 설치 및 Bolt tensioning, 행어로프 설치
위 치	주항로교	예정일정	2017년 10월 ~ 11월
내 용	Main Girder Erection
위 치	주항로교	예정일정	2017년 10월 ~

영광-해제 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 영광군 염산면 옥실리 1220)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보 동영상 시청, 현장소개, 질의응답	30분
3	안전장비 착용 후 접속교 및 주탑 시공현장 이동	15분
4	시공공법 브리핑 및 견학	35분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	20분
6	설문조사 작성 및 감평	10분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
주탑													- 주탑 PY1, PY2 : 탑정부 및 주두부
접속교(종점부)													- FCM시공(P11 ~ P13) KeySeg 시공(P9~P13)
접속교(시점부)													- 주두부설치 (P1~P4) FCM시공 (P3~P6)
주경간교 FCM													- 주탑 PY2 FCM 8Seg

사 진 대 지

내 용	칠산대교 시공전경
위 치	주탑 및 접속교	예정일정	2017년 12월
내 용	주경간교 주탑 및 접속교 FCM 시공
위 치	주탑 및 접속교	예정일정	2017년 12월

지도-임자 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 신안군 지도읍 감정리 1678-3)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보 동영상 시청, 현장소개, 질의응답	30분
3	안전장비 착용 후 시공현장(임자1,2대교) 이동	15분
4	시공공법 브리핑 및 견학	40분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	15분
6	설문조사 작성 및 강평	10분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될 수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
주탑 시공 (임자1대교)													- 임자1대교 주탑 PY1 1~8LOT, 가로보
주탑 시공 (임자2대교)													- 임자2대교 주탑 PY1 18~28LOT, 가로보
강교 운반 및 설치 (임자2대교)													- 주경간 강교설치(24/49SEG) - 케이블공(52/104개소) - 접속교 강교설치(9경간)

사 진 대 지

내 용	주탑공, 주경간 및 접속교 상부공
위 치	임자2대교 PY1,2	예정일정	2017년 12월까지
내 용	주탑공
위 치	임자1대교 PY1,2	예정일정	2017년 12월까지

화양-적금(2공구) 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 여수시 화양면 장수리 1370)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보 동영상 시청 현장소개 및 질의응답	30분
3	물양장 이동	10분
4	주탑 시공 브리핑 및 견학	40분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	10분
6	설문조사 작성 및 감평	20분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
주 탑 (PY-1)													- 주탑 PY1 32~48LOT 상단가로보 설치
주 탑 (PY-2)													- 주탑 PY2 32~48LOT 상단가로보 설치
상부공													- 주두부 가벤트 설치 주두부 설치(FSM 공법) 1~6SEG (FCM 공법)
케이블공													- 보강거더 케이블 설치

사 진 대 지

내 용	주탑 시공중
위 치	주탑(PY-1)	예정일정	2017년 9월까지
내 용	주탑 시공중
위 치	주탑(PY-2)	예정일정	2017년 9월까지

화양-적금(3공구) 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 여수시 화양면 화서로 515)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보 동영상 시청, 현장소개 및 질의응답	20분
3	물양장 이동	10분
4	현장 브리핑 및 견학	50분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	10분
6	설문조사 작성 및 감평	20분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 7인 이내만 시공 현장견학 가능(통선 승선인원 : 11명)

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
조발대교 접속A교													- P1~P3 주두부 및 상부 FCM 시공
조발대교 주탑													- 주탑 상부 교각 시공
조발대교 접속B교													- P4~P5 주두부 및 상부 FCM 시공
토 공													- 둔병도·조발도 토공 및 배수공

사 진 대 지

내 용	조발대교 시공전경
위 치	조발대교(P1 ~ P5)	예정일정	2019년 2월까지
내 용	조발대교 주탑 시공전경
위 치	조발대교 주탑	예정일정	2019년 2월까지

추포-암태 도로건설공사

상운지구

L=7.00km

(전남 신안군 암태면 신기도창길 223)

1. 견학 프로그램 일정 (총 소요시간 : 약 120 분)

순 서	견 학 내 용	소 요 시 간
1	(현장사무실 도착)	-
2	익산청 홍보동영상 시청, 현장소개, PBD공법/RCD공법 브리핑 및 질의응답	30분
3	안전장비 착용 후 현장 이동	20분
4	PBD공법/RCD공법 현장 설명	20분
5	기념사진 촬영 및 현장사무실 복귀	20분
6	설문조사 작성 및 감평	20분
7	안전장비 반납 및 차량탑승	10분

* 현장 작업 여건상 일정이 변경될수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2. 2017년 주요 공정

공정명	월별 일정												주요 시공 내용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
연약지반공(PBD) (약 90일)													- PP MAT 포설, 쇄석 MAT 포설 - PET 포설 - PBD 압입
현장타설말뚝공(RCD) (약 210일)													- 희생강관 압입, 토사굴착 - 풍화암, 연암 굴착 (RCD) - 철근망 근입 및 콘크리트 타설
교각공 (약 240일)													- 거푸집 설치 - 철근가공 조립 - 콘크리트 타설
부대공 (약 120일)													- 세륜세차시설 - 가설방음벽 - 가도공

사 진 대 지

내 용	PBD공법(시공예정)
위 치	STA.0+100~503, STA.1+548~820	예정일정	2017년 6월까지
내 용	RCD공법(시공예정)
위 치	추포교(P1~P15)	예정일정	2017년 10월까지