지역경영을 선도하는 세계적 지방재정 전문기관

- 간판디자인 방향 제시를 위한 -

2022 좋은간판 나눔 프로젝트 추진계획(안)

2022. 1.

	한국지방재정공제회
	경관개선부

< 목    차 >

Ⅰ. 2022년 사업계획	1

Ⅱ. 사업추진 세부계획	2

1단계

사업지역 선정	2

2단계

지자체 계획 수립	2

3단계

간판디자인 제안공모	3

4단계

간판디자인 개발 및 설계	3

5단계

간판 제작·설치	4

6단계

결과검수, 사후관리 및 홍보	5

Ⅴ. 추진일정	5

□ 주요 업무별 추진 일정	5

Ⅰ		2022년 사업계획

□ 사업개요

○ 추진방향

- 독창적인 간판디자인 개발을 통하여 간판개선사업의 디자인 방향과 롤모델 제시

- 대학생이 참여하는 관·학 협업 프로젝트 진행(센터가 지정한 1개소)

○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월

○ 사업예산 : 총 330백만원 ※ 센터와 지자체 2:8 매칭

- 간판개선사업비 : 66백만원(22백만원 X 3개 지역) 지원

주 체	한국옥외광고센터	지자체(3개소)
사업내용	간판 디자인・설계	간판 제작・설치
소요예산(2:8매칭)	66백만원(22백만원*3개소)	약264백만원(88백만원*3개소)
총 예산	약 330백만원(110백만원*3개소)

○ 사업추진 절차

추 진 과 정		내 용	주 체
1단계	사업지역 선정	공모를 통해 3개 지자체 선정(1지역당 업소수 25개 내외)	센터
▼
2단계	사업설명회	지자체 대상(공무원, 주민대표) 사업설명회	센터
▼
3단계	디자인 제안공모	지역별 간판디자인 수행사 선정(3개 업체)	센터·지자체
▼
4단계	간판디자인 개발	1개 지자체는 관·학 협업 디자인 개발(대학생) 지역·업소 특성에 맞는 간판디자인 개발	센터·지자체 산학협력단
▼
5단계	간판 제작·설치	간판 제작·설치 업체선정 및 간판시공	지자체
▼
6단계	결과 제출·관리	간판 제작·완료 결과 검수 및 사후관리	센터·지자체

Ⅱ		사업추진 세부계획

1단계		사업지역 선정

□ 사업지역 공모

○ 공모기간 : 2022. 2. 7. ~ 3. 3.(약 1개월간)

○ 공모대상 : 전국 지방자치단체

- 대상지의 간판개선으로 지역의 균형발전을 초래할 수 있는 지역

- 지역자원을 발굴하여 차별화된 간판개선이 가능한 소규모 상가 밀집지역

- 지자체에 전문가를 보유하고 있으며, 주민주도의 사업이 가능한 지역

○ 공모방법 : 전국 시·군·구 공모신청 및 우리회 접수

① 사업지역 추천(지자체)	⇨	② 심사 · 선정(우리회)	⇨	③ 사업시행(우리회/지자체)
□ 지자체별 대상지 선정 □ 공모서류 및 자료 제출		□ 서류 및 영상 심사 · 평가 □ 심의위원회 개최, 사업지역 선정		□ (우리회) 디자인개발 등 사업지원 □ (지자체) 사업계획수립 ,간판제작설치

□ 사업지역 선정

○ 사업지역 선정 : 3개 지자체 선정(평가 고득점 순)

- 평가일정 : 3월중

- 위원회 구성 : 우리회, 외부 전문가(옥외광고 및 디자인 분야)

- 평가기준 : 지자체 추진역량, 장소의 타당성, 사업계획 적정성

- 평가방법 : 서류(정량) 및 사업지역 영상(정성) 평가

※ 필요시 사업 신청지역 현장조사 실시

2단계		지자체 계획 수립

□ 사업설명회 개최

○ 개최일정 : ’22년  3월 하순  ※ 선정 지자체와 일정 협의 후 확정

○ 참석대상 : 지자체 담당공무원, 주민협의체 대표, 관련분야 전문가, 센터 등

○ 주요내용 : 사업 설명, 업무 주체간 협의, 유의사항 안내 등

□ 지자체 세부 사업추진계획 수립

○ 수립기간 : ’22. 3 ~ 4월 중

○ 주요내용 : 각 지역의 여건에 적합한 사업추진계획 수립 ※ 우리회와 협의

- 예산편성 : 지자체의 간판 제작·설치 비용* 예산 편성

* 간판 제작·설치 예산 : 1개 지자체 88백만원 책정 권고(25개 업소 기준)

- 정비시범구역 지정 : 사업구간을 ‘광고물등 정비시범구역’으로 지정

※ ｢옥외광고물법｣ 제4조의3에 근거

3단계		간판디자인 제안공모

○ 공모기간 : ’22년 3월 ~ 4월  ※추후 일정 확정

○ 공모대상 : 디자인 및 옥외광고 관련 사업자

○ 소요예산 : 66백만원(22백만원*3개지역)

○ 공모방법 : 유관기관, 우리회 홈페이지 공고를 통해 제안서 접수

○ 계약방식 : 수의계약(디자인 다양성 확보를 위해 지역별 중복계약 불허)

※「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ｣ 제7조(계약의 방법), 동 법 시행령 제 26조 제①항      (추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매 또는 용역계약)

○ 주요내용 : 제안서 평가를 통해 우수 간판디자인 업체 선정(3개 업체)

디자인 공모	▶	공모 접수	▶	심사·평가	▶	사업자 선정	▶	과업수행
제안공모 공고		디자인 제안서 접수		심의위원회 개최		지역별 우수 사업자 선정		계약체결 및 과업수행

○ 평가방법 : 평가위원회 구성·개최, 평가항목에 따라 제안서 심사(총점 100점)

4단계		간판디자인 개발 및 설계

○ 과업기간 : ’22년 4월 ~ 7월

○ 사업내용 : 벽면이용간판, 창문이용광고물, 경관 등 디자인 개발 및 설계

○ 참여주체 : 우리회, 디자인업체, 주민협의체, 지자체, 전문가

○ 추진사항 : 우수 간판디자인 개발을 위한 사업절차 이행

- TF팀 구축·운영 : 각 분야별 전문가* 구성, 현장파악 및 지역분석, 문제점 도출, 디자인방향 및 전략 수립 등 창의적 디자인 발굴을 위한 집중 토론회의 개최

* 주민협의체, 지자체 담당공무원, 전문가, 디자인업체, 센터 등 관계자로 구성

- 주민 참여 교육 : 사업취지 및 절차 안내, 우수간판사례 공유, 옥외광고물에 대한 인식 개선 교육, 사후관리 교육 실시

- 디자인컨설팅 : 수준 높은 디자인 제시를 위한 밀착형 컨설팅 추진

- 소통창구 마련 : SNS를 활용한 자발적 주민 참여 및 협의체 활성화

5단계		간판 제작·설치

○ 과업기간 : ’22년  8월 ~ 12월  ※ 지자체별 일정이 다를 수 있음

○ 사업내용 : 디자인 및 실시설계도서에 따라 간판 제작·설치

※ 각 지자체의 사업추진계획, 방침, 과업지시에 따라 간판 제작·설치 수행

○ 참여주체 : 우리회, 제작·설치 업체, 디자인업체, 주민협의체, 지자체

○ 추진사항 : 정밀시공을 위한 세부 추진절차 수행

- 준비과정 : 센터의 간판디자인 성과품(실시설계도면, 디자인 동의서, 원가내역서 등)수령 및 확인, 간판 제작·설치 업체 선정 계획수립

- 간판 제작·설치 업체 선정 : 입찰 진행을 통한 업체 선정 및 계약 체결

- 주체별 협의 : 디자인 의도 파악, 실시설계도면 상세 설명을 위한 주체별*업무협로 도면해석의 오류 및 제작 실수 방지, 현장상황으로 인한 디자인 설계변경 발생 시 센터와 협의

* 지자체, 간판디자인 업체, 제작·설치 업체, 옥외광고센터 협업

- 간판 제작·설치 및 디자인 검수 : 업체의 간판 제작상황 확인 및 공장 검수 실시, 현장상황에 적합한 간판 설치 확인

- 행정절차이행 : 광고물 허가·신고 등 행정 절차 이행

6단계		결과검수, 사후관리 및 홍보

○ 사업결과 확인 : 사업 결과물 및 간판개선 전·후 사진 검수

○ 사후관리 : 주민 및 디자인경유제를 통한 사후관리, 불법광고물 예방

- 관리협의체 운영 : 사업 완료지역 주민의 자발적인 옥외광고물 관리로 옥외광고물 및 지역경관의 지속적인 수준 유지

- 디자인경유제 : 사업 완료지역의 변경 및 신규 간판 설치 시 우리회 온라인 컨설팅을 통해 디자인, 설치위치, 가이드라인 준수여부 등 확인

○ 사업홍보 : 사업추진 과정, 디자인콘셉트 설정, 주민협의 절차, 사업실행 노하우 등 홍보(옥외광고 전문지, 브로슈어, 온라인 홍보 등)

Ⅲ		추진일정

□ 주요 업무별 추진 일정

추진시기 주요업무	1분기						2분기						3분기						4분기
	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
사업 대상지 공모 및 선정
사업설명회 개최
간판디자인 제안공모 및 업체 선정
간판디자인 추진
지역별 간판 제작·설치 용역
홍보 브로슈어 제작